Programa FDCAN Fuerteventura (2023-2027)	IMPORTE APLICADO AL FDCAN 2023			

Descripción de las actuaciones	
IMPORTE APLICADO AL FDCAN 2023	
INDICADORES REALIZADOS 2023	
ESTADO DE LA ACTUACIÓN	
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS	19.648.184,14 €		CAMBIO ESTADO SOLICITADO PARA 2023 (PEND.CS)	
Eje 2.1 Infraestructuras de Transporte	3.739.292,93 €			
ACCIÓN 1: Actuaciones en Carreteras de Interés Regional. Fase 1		NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	
ACCIÓN 2: Reasfaltado y mejora del firme Vías Municipales interpoblacionales. Fase 1		NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	
ACCIÓN 3: Actuaciones en Carreteras Insulares. Fase 1	3.739.292,93 €	24,51 Km
6 inversiones mejoradas	km	
Mejora firme FV-207 ppkk 7+050 a 10+750 (Tefía-Glorieta Almácigo)	112.291,62 €	3,7	Finalizada: AR 10/03/23	
Rehab.superf.firme FV-10 ppkk 0+790 a 1+470 (Avda Juan de Bethencourt)	623.099,31 €	0,68	Finalizada: AR 21/06/23	
Rehab.superf.firme FV-20 ppkk 4+250 a 6+150 (Glorieta vertedero-Llanos Pelados)	556.066,79 €	1,9	Finalizada: AR 10/03/23	
Rehabilitación superficial del firme de la carretera FV - 20 entre los PP.KK. 25+150 y 29+250 (cuesta Pedrales - Tiscamanita)	824.492,27 €	4,1	Finalizada: AR 06/08/24	
Rehabilitación superficial del firme de la carretera FV - 20 entre los PP.KK. 19+280 y 25+150(Antigua- Cuesta Pedrales)	705.956,22 €	5,87	Finalizada: AR 28/06/23	
Rehabilitación superficial del firme de la carretera FV - 605 entre los PP.KK. 11+740 y 20+000 (Sicasumbre-Las Hermosas)	917.386,72 €	8,26	Finalizada: AR 10/05/23	
Eje 2.2 Infraestructuras científicas y tecnológicas				
ACCIÓN 2.2.1: Dotación del laboratorio agroalimentario de Fuerteventura		NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	
ACCIÓN 2.2.2: Centros de innovación tecnológica y sede de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura		NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	
ACCIÓN 2.2.3: Laboratorio de innovación tecnológica para las artes visuales emergentes		NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	
ACCIÓN 2.2.4: Edificio Polivalente ISSEC		NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	
ACCIÓN 2.2.5: Canarias Stratoport for HAPS. Fase I		NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	
ACCIÓN 2.2.6 Canarias Stratoport for HAPS. Fase II		NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	
Eje 2.3 Creación, mejora y rehabilitación de espacios públicos con potencialidades turísticas y, en general todas aquellas que aportan valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico	
1.332.099,12 €	
INDICADORES REALIZADOS 2023	
ESTADO	

ACCIÓN 2.3.1: Mejora infraestructuras con potencialidad turística en espacios públicos. Fase 1	

1.332.099,12 €	
Nº Actuac: 2 finalizadas
m2 superfice: 15.897,33 m2 km mejorados: 0,150 km
nº proyectos redactados: 0	

EN EJECUCIÓN	

Acondicionamiento Mirador Carretera FV30 Valle de Santa Inés	
31.543,26 €	m2 superfice: (Previsto: 1.735,50 m2)	
En ejecución en 2024	
Acondicionamiento de la plataforma de aparcamiento del Museo del Queso y del Molino de Antigua	895.648,14 €	Superfic.mejorad: 15.897,33 m2	Finalizada, AR 25.09.23	

Muros de contención y acondicionamiento del espacio público en la calle Coronel en Valle de Santa Inés	
402.967,44 €	superfic.mejorad.(m2) 150 ml	
Finalizada: AR 05/02/24	
Paseo peatonal en la localidad de Tesejerague	1.940,28 €	0	En ejecución en 2024	
Eje 2.4 Infraestructuras hidráulicas	10.319.048,01 €	INDICADORES REALIZADOS 2023	ESTADO	

ACCIÓN 1: Producción industrial de agua desalada para abastecimiento . Fase 1	

1.111.002,23 €	Nº infraest.mejor: 7
Capacidad anual de producc.: m3:
4.728.000 m3/año Poblac.Benef: 100.000 hab	

EN EJECUCIÓN	
ZONA NORTE			
Ampliación EDAM de Corralejo (hasta 5.000 m3/día).	8.924,10 €	0	En ejecución en 2024	
Proyecto reforma general centro transformación EDAM Corralejo	198.833,70 €	0	En ejecución en 2024	
ZONA CENTRO			
Ampliación EDAM Puerto del Rosario (40.000 m3) e instalaciones anexas de vertido:
Ampliación EDAM Puerto del Rosario 2ªFASE	2.017,18 €	Capacidad anual de producc.: 2.628.000 m3/año	Finalizada: AR 24/07/24	
Ampliación EDAM Puerto Rosario (hasta 40.000 m3) e instalaciones anexas de vertido:.
FTV III Sustitución de los módulos Nº1 y Nº2 planta desalinizadora FTV III	
303.266,73 €	
Capacidad anual de producc.: 2.100.000 m3/año	
Finalizada:	
Remineralización con lechos de calcita del agua desalada en la IDAM Puerto del Rosario	1.476,60 €	0	En ejecución en 2024	

Proyecto nuevo sondeo de captación agua de mar EDAM Puerto del Rosario	
141.748,51 €	
0	
En ejecución en 2024	
ZONA SUR			
Suministro e instalación de dos nuevos filtros de arena en la EDAM de Gran Tarajal	454.735,41 €	Nº infraest mejorada: 1	Finalizada: AR 10/07/23	

Programa FDCAN Fuerteventura (2023-2027)	IMPORTE APLICADO AL FDCAN 2023			

Descripción de las actuaciones	
IMPORTE APLICADO AL FDCAN 2023	
INDICADORES REALIZADOS 2023	
ESTADO DE LA ACTUACIÓN	
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS	19.648.184,14 €		CAMBIO ESTADO SOLICITADO PARA 2023 (PEND.CS)	

ACCIÓN 2: Almacenamiento de agua desalada para abastecimiento. Fase 1 (Reprogramación según CS 1/2024)	

1.693.203,09 €	Nº infraest: 2
Volumen anual agua almacenada: 17.700 m3
Poblac.Benef:		
ZONA CENTRO			
Reforma depósito y cuarto de instalaciones Herradura cuadrados Consta de dos actuaciones: 1º, 2ª
1º) Reforma depósitos La Herradura cuadrados	

487.952,15 €	Nº infraest mejorada: 1
Volumen anual agua almacenada: 17.700 m3	

Finalizada: AR 22/10/24	

Reforma depósito y cuarto de instalaciones Herradura cuadrados Consta de dos actuaciones:
2º) CUARTO DE INSTALACIONES DE DEPÓSITOS HERRADURA CUADRADOS	

1.205.250,93 €	
Nº infraest mejorada: 1	

En ejecución en 2024	

ACCIÓN 3: Transporte y distribución de agua desalada para abastecimiento. Fase 1	

6.904.661,10 €	Nº infraest: 5
Long.red transp.y distrib.creada o mejor: 4.690ml
Poblac.Benef: 100.000 hab	

EN EJECUCIÓN	
ZONA NORTE			

Conducción por gravedad depósito Cabecera Bayuyo (cota 160) - cruce de Lajares -Lajares - Depósito El Cotillo - El Roque. Conexión entre los depósitos de Cabecera Bayuyo y Depósito de Cabecera Morro Francisco (Existente a cota 105) y Conexión entre el depósito El Cotillo - El Roque y la conducción existente El Roque- El Cotillo
1er Tramo 1 CONEXIÓN DEPÓSITO MORRO FCO EXISTENTE CON LAJARES 2023/21242	

43.163,55 €		

En ejecución en 2024	
Conducción por gravedad La Oliva - Tindaya	948.424,03 €		En ejecución en 2024	
Conducción por gravedad depósito La Oliva-Villaverde a Depósito Tindaya y Lajares.

1er Tramo conducción gravedad depósito La Oliva a depósito Lajares	

929.584,92 €		

En ejecución en 2024	
ZONA CENTRO			

Canalización impulsión planta desaladora EDAM Pto Rosario a depósito de La Herradura	

4.335.790,06 €	Nº infraest: 1
Long.red transp.y distrib.creada o mejor: 4.690 ml
Poblac.Benef: 100.000 hab	

Finalizad AR 29/02/24	
Sustitución de la red de transporte desde el depósito Calderetilla al Depósito Tiscamanita	647.698,54 €		En ejecución en 2024	

ACCIÓN 4: Otras inversiones hidráulicoas en el ámbito insular. Fase 1	
259.292,93 €	Nº infraest: 1
Poblac.Benef: 100.000 hab	
EN EJECUCIÓN	

Remodelación de todas las estaciones de Bombeo de la red hidráulica Insular (20 estaciones) - Proyectos de ampliación potencia/nuevo equipamiento bombas - eléctrico/Industria

Remodelación 1/20. Modificación y ampliación del centro de transformación para estación de bombeo La Herradura	

259.292,93 €	

Nº infraest:1 Poblac.Benef: 100.000 hab	

En ejecución en 2024	
ACCIÓN 5: Saneamiento y depuración de aguas residuales. Fase 1	-	€	NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	

ACCIÓN 6: Conservación y mejora del dominio público hidráulico. Fase 1	

350.888,67 €	Nº infraest: 2
Metros2 superfic.infraest. creada o mejorada: 7.150 m2
Poblac.Benef: 100.000 hab		

Encauz y canaliz tramo del cauce pbco Bco Las Peñitas y mejora acceso a parcelas en Lomo Las Tierras (Vega de Río Palmas)	
4.306,75 €	
Nº infraest: 1	En actuaciones preparatorias, proyecto redactado, pend.autoriz.	

Acondicionamiento de márgenes y acceso del Barranco de Bácher. Montaña Hendida	
346.581,92 €	Nº infraest: 1
Metros2 superfic.infraest. creada o mejorada: 7.150 m2	
En ejecución en 2023	

Eje 2.7 Zonas comerciales abiertas	
- €			
ACCIÓN 1: Revitalización Zonas Comerciales Abiertas. Fase 1		NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	

Eje 2.8 Energía Renovables	
12.058,90 €			
ACCIÓN 1: Electrificación mediante ER en explotaciones ganaderas y explotaciones agrícolas. Fase 1		NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	

ACCIÓN 2: Dotación de alumbrado público mediante ER a espacios públicos de la isla de Fuerteventura. Fase 1	

12.058,90 €	
N.° actuaciones de electrificación con ER en explotaciones agrarias: 1
nº proyectos: 1
Poblac.Benef: 100.000 hab TnCO2 evitados:		

Alumbrado público con ER Autovía FV2 (Tramo enlace aeropuerto)	

12.058,90 €	N.° actuaciones: 1
nº proyectos: 1
Poblac.Benef: 100.000 hab TnCO2 evitados:	

En preparatorias (s.industria)	

Programa FDCAN Fuerteventura (2023-2027)	IMPORTE APLICADO AL FDCAN 2023			

Descripción de las actuaciones	
IMPORTE APLICADO AL FDCAN 2023	
INDICADORES REALIZADOS 2023	
ESTADO DE LA ACTUACIÓN	
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS	19.648.184,14 €		CAMBIO ESTADO SOLICITADO PARA 2023 (PEND.CS)	
ACCIÓN 3: Dotación de instalaciones de producción con desconexión de la red mediante ER fotovoltaica y eólica en edificios públicos del Cabildo Insular de Fuerteventura. Fase 1	- €	NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	
ACCIÓN 4: Instalaciones de ER en edificos públicos de la isla de Fuerteventura. Fase 1		NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	
ACCIÓN 5 : Fomento de ER mediante implantación de vehículos 100% eléctricos y puntos de recarga en la isla de Fuerteventura. Fase 1	
- €	
NO ACTIVA EN 2023	
NO ACTIVA EN 2023	
ACCIÓN 6: Centro de generación de energía procedente de fuentes renovables con almacenamiento en la parcela IN del
Sistema General del Parque Tecnológico de Fuerteventura	- €	NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	

Eje 2.9 Creación, mejora y/o modernización de infraestructuras y equipamientos en el sector primario	
152.375,00 €			
ACCIÓN 1: Acondicionamiento y mejora de las instalaciones de la Granja experimental de Pozo Negro. Fase 1	- €	NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	
ACCIÓN 2: Nuevo Matadero Insular	- €	NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	

ACCION 3: Modernización y mejora del regadío zona centro sur de Fuerteventura.	
152.375,00 €	nº proyectos: 1
% inversión realizada: 1%		
Modernización y mejora del regadío en la zona centro sur de Fuerteventura	152.375,00 €	nº proyectos: 1
% inversión realizada: 1%	En ejecución	
Eje 2.10 Y en general, todas aquellas infraestructuras que mejoren la competitividad de la economía canaria	4.093.310,17 €			

ACCIÓN 1: Plan insular de asfaltado de caminos municipales Fuerteventura. Fase 1	

4.093.310,17 €	
Nº infraestr.creadas o mej: 3 nº proyectos redact.: 2
Superf.mejorada (ml): 9.738,03 ml Poblac.Benef: 100.000 hab	

EN EJECUCIÓN	
TM ANTIGUA			

Asfaltado del camino rural Antigua-Las Pocetas y del camino al Carbón en Antigua	
7.081,90 €	Nº infraestr.creadas o mej: nº proyectos redact.: 1 Poblac.Benef: 100.000 hab	
Proyecto redactado, obra en actuac.preparat.	
TM LA OLIVA:		

Vial para la Interconexión del Semi-enlace con la Localidad de Parque Holandés	

2.071.917,54 €	
Nº infraestr.creadas o mej: Superf.mejorada (ml): 2.700 ml Poblac.Benef: 100.000 hab	

Finalizada: AR 27/02/24	
TM PUERTO DEL ROSARIO:		

Acceso rodado y peatonal a la Casa de Los Mayores de Casillas del Ángel	

255.374,23 €	
Nº infraestr.creadas o mej: nº proyectos redact.: 1 Poblac.Benef: 100.000 hab	

En ejecución en 2024	
TM PÁJARA - TUINEJE:		

Mejora del tramo de la carretera FV-618 desde Cardón hasta su encuentro con la FV-605	

1.758.936,50 €	
Nº infraestr.creadas o mej: 1 Superf.mejorada (ml): 28.152,10 m2: 7.038,03 ml
Poblac.Benef: 100.000 hab	

Finalizada: AR 10/05/24	
ACCIÓN 2: Creación, mejora y/o modernización de infraestructuras para la celebración de ferias y eventos : Fase I		NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	
ACCIÓN 3: Inversiones de eficiencia energética en edificios públicos. Fase 1		NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	
ACCIÓN 4: Infraestructuras para la conectividad entre barrios. Fase 1		NO ACTIVA EN 2023	NO ACTIVA EN 2023	
TOTAL	19.648.184,14 €